체육인교육센터 부지선정 공고문

선수 및 지도자, 일반 국민들에게 종합적이고 체계적인 교육·훈련 등 복합시설 기능을 제공할 체육인교육센터를 건립하기 위해 아래와 같이 부지선정 공모를 진행하오니, 기초자치단체의 많은 관심과 참여 바랍니다.

▪	접수기간	2018. 4. 17.(화) ~ 5. 17.(목)
		※ 접수마감: 2018. 5. 17.(목) 18:00 도착분까지 유효 ※ 접 수 처: 대한체육회 정책연구센터(☎02-970-0523~4)

▪	공모자격	기초자치단체

▪	공모분야	체육인교육센터 건립 부지선정

▪	공모내용	300명 규모의 교육․훈련시설 건립이 가능한 부지
		- 교육시설: 대강당, 세미나실, 강의실, 교육실 및 연구실 - 편의시설: 숙소(300명 수용), 식당, 휴게실, 사우나실, 관리실 - 체육시설: (실내) 다목적체육관, 체력단련실 등 (실외) 운동장, 테니스장, 족구장, 옥외수영장 등

▪	제출방법	공문서에 한함(전자유통문서 가능)

▪	제출서류	유치신청서 (내용 “별첨”)
		※ 유치배경, 유치단체 현황, 향후 부지확장성, 기대효과, 유치확약서, 기타 참고사항 등

▪	입지여건	사계절 기후가 온화한 지역, 접근성, 부지면적 및 시설, 지자체 지원 등

▪

공모절차

유치 공모(홈페이지)  유치제안서 접수(대한체육회)  유치제안서 1차 심사  현지답사 및 2차 심사  최종후보지 2개 선정  최종 부지 확정(대한체육회 이사회)  유치단체 결과 통보(7월중)

체육인교육센터 부지선정 유치신청 개요

1	부지선정 계획

□ 필요성

❍ 선수 및 지도자의 스포츠윤리, 은퇴선수 진로 및 경력 개발은 물론 일반 국민 대상 연수기능 제공 등 스포츠 분야의 공정과 서비스를 한 층 강화해야 한다는 사회적 분위기 형성

- 종합적이고 체계적인 교육․연수 기능 제공으로 ‘존경받는 체육인’ 양성, 체육의 사회․문화적 가치 창출 선도

□ 추진배경

❍ 대한체육회 미래 100년의 청사진을 밝히기 위한 비전과 주요 추진과제  일환으로 체육인교육센터 설립 추진계획 수립(KSOC 아젠다 2020)

체육인 1,050명 대상 설문조사 결과(2016.12월)
▪ 체육인 연수를 주체하는 기관에 대한 의견 ‧ 대한체육회(64.6%), 대학 등 교육 전문기관(20.7%), 국민체육진흥공단(14.8%)
대한체육회 고유 목적사업
▪ 정관 제5조(사업) ①...4. 체육인의 권익증진, 복지 및 교육관련 사업 11. 국제스포츠교류, 올림픽운동 및 국제교육·문화 프로그램 관련된 제반 사업

□ 추진방안

❍ 위치: 우리나라 사계절 기후가 비교적 온화한 지역

- 사계절 기후가 온화한 대상부지 선정

- 우리나라 여건상 국가대표선수 등 동계훈련 적정 지역

❍ 부지선정: 기초자치단체 대상으로 유치신청 공모를 통해 선정

2	부지선정 주요내용

□ 사업규모: 약 300명 규모의 교육·훈련시설

❍ 사업기간: 2018. ~ 2022.(5년간)

❍ 위치 및 부지면적: 약 160,000㎡

❍ 시설내용

- 교육시설:	대강당, 세미나실, 강의실(대·중·소), 정보화교육실, 교육연구실

- 편의시설: 숙소(300명 수용), 식당, 휴게실, 사우나, 관리실

- 실내체육시설: 다목적체육관, 체력단련실, 다목적실

- 옥외체육시설: 운동장(축구장), 테니스장, 족구장, 옥외수영장 등

□ 사업대상

❍ 체육인(선수·심판·지도자·동호인) 및 일반국민 대상으로 연수 및 보수교육

❍ 국가대표, 후보선수, 청소년대표, 꿈나무선수·지도자를 위한 지역거점 혹한기 순환훈련시설

□ 소요예산: 450억 원

* 현재, 체육인교육센터 건립 타당성조사 연구용역이 진행 중에 있으며, 그  결과에 따라 정부의 사업승인 및 예산 배정이 유보되거나 중지될 수 있음. 이에, 공모에 참여한 기초자치단체는 본 사업이 중단되거나 취소될 경우에도 대한체육회에 일체 이의를 제기하지 않겠다는 확약서 첨부

□ 추진일정(진행 상황에 따라 변경될 수 있음)

❍ ‘18. 4월 ~ 7월: 부지선정

❍ ‘18. 4월 ~ 7월: 사전 타당성 조사(용역)

❍ ‘18. 8월 ~ 12월: 지자체 업무협의 및 기본설계

❍ ‘19. 1월 ~ 6월: 실시설계

❍ ‘19. 6월 ~ ’20. 6월: 관리계획 인가, 공사입찰

❍ ‘20. 6월 ~ ’22. 6월: 착공 및 준공

3	유치신청 방법

□ 유치신청 마감일: 2018. 5. 17.(목) 18:00까지

□ 유치신청서: 공문서에 한함(전자유통문서 가능)

(제출서류/기본사항)

❍ 유치 배경

❍ 유치단체 현황

․ 면    적

․ 인    구

․ 기후조건

․ 재정자립도

․ 중앙 또는 광역 소속기관(공공기관 포함) 현황

․ 대외적 특성

․ 기타사항

❍ 대상부지 입지여건

․ 위    치

․ 면    적

․ 스포츠경기 및 훈련시설(거리 및 소요시간)

․ 종합의료시설(거리 및 소요시간)

․ 문화시설 및 국·공립 휴양·관광시설

․ 전국 광역단위별 기준 접근성

(공항, 철도, 고속도로, 국도, 지방도로 교통망 등)

․ 기타사항

❍ 기대효과

❍ 기타 참고사항 등

❍ 유치 확약서(양식: 붙임)

․ 유치단체 의회 의장               ․ 유치단체장

4	부지선정 고려사항

구분	제안사항	계획/근거	비고
부지조건	- 면적 외 예비부지 확보 - 무상제공(기부체납) - 관련법상 건축 가능 - 공·사유권의 법적 해소 - 지반 여건(해발, 경사도, 식생 상태 등) - 민원 발생소지(대책방안 등) - 기타사항 등
기후조건	❮최근 10년간 기준표 제시❯ - 연평균기온 - 동절기(12월~3월) 평균기온 - 지진, 홍수, 태풍 등 규모 및 횟수 - 기타사항 등
도시기반 시설제공	- 상수도, 전기, 통신 및 도시가스 - 진입도로 개설 - 건축물·지장물 철거 - 오·폐수 처리시설 - 쓰레기·하수 처리 - 기타사항 등
행정사항	- 유치신청에 따른 종합적인 관련법규에 대한 검토내용 - 그 외 지원 및 협조사항 등
기타사항

5	부지선정 절차

부지선정 절차 등 결정: 부지선정위원회 회의 개최

유치 공모: 대한체육회 → 홈페이지/시‧도체육회

유치제안서 접수: 대한체육회 ← 유치단체

유치제안서 심사(1차): 부지선정위원회/후보지 선정

후보지 현지답사 및 유치제안 심사(2차): 부지선정위원회

최종 후보지 2개 선정: 부지선정위원회

최종 부지 확정(대한체육회 이사회)

유치단체 결과 통보

붙 임 1

확 약 서

○○○○(유치단체의회명)는 대한체육회에서 추진하는 “체육인교육센터” 건립과 관련하여 ○○○(유치단체명)가 해당 부지를 유치함에 있어 공모 참여 및 건립에 필요한 전반적인 사항을 적극 협력․지원할 것을 확약합니다.

2018년   월    일

○○○○(유치단체의회장명)          (인)

대한체육회장 귀하

붙 임 2

확 약 서

○○○○(유치단체명)는 대한체육회에서 추진하는 “체육인교육센터” 건립 공모와 관련하여 부지선정 대상지로 선정된 후, 정부의 사업승인 및 예산배정이 유보되거나 중지될 경우에도 일체 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

2018년   월    일

○○○○(유치단체장명)          (인)

대한체육회장 귀하